11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

청소년수련관 건립

담당자

사회복지과 박수웅

(☎860-2148)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 균형있는 청소년 활동공간 마련으로, 청소년건전육성 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 10 〜 2016. 12

○ 위 치 : 동두천시 지행로 95(281-1)

○ 규 모 : 부지2,314㎡, 연면적 3.624.31㎡【지하1층〜지상3층】

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7,200	310	1,717	1,653	3,520
국 비	4,800		1,300	1,100	2,400
시 도 비	96		97
시군구비	2,304	310	320	553	1,120

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3 %)

○ 2013.06.05. : 부지경계측량 완료 (1,166,000원)

○ 2013.10.16. : 기본 및 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2014.07.29. : 수련관건립 규모 및 국도비 확보방안 재검토

○ 2015.03.03. : 착공

○ 2016.12.30. : 완공예정

□ 사업변경 내역

○ 실시설계에 따른 총사업비 변경 검토중으로 사업기간을 당초 2014년에서

2016년으로 조정

사업명

장사시설 신축(공설묘지 재개발)

담당자

사회복지과 박종만

(☎860-2266)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공설묘지 만장과 더불어 늘어나는 화장률에 대비하여 매장 중심의 공설묘지를

봉안시설 중심의 공원묘역으로 재개발 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008.09 ~ 2017.12

○ 위 치 : 동두천시 안흥동 산62번지 일원

○ 규 모 : 봉안시설(21,270기) 관리사무소, 주차장, 공원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  16,790백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,790	1,179	13	587	15,011
국 비	4,449	0	0	386	4,063
시 도 비	954	0	0	83	871
시군구비	11,387	1,179	13	118	10,077

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2008.9.  : 사업추진계획수립

○ 2010.10. : 기본설계 완료

○ 2011.12. : 진입도로 및 교량공사 완료

○ 2013.11. : 봉안담 1기 착공(2014.8월 준공 예정)

□ 향후계획

○ 2015년 자연장 1개소 추가설치

○ 2017년까지 단계적 공설묘지 재개발 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경(당초:13,130백만원, 변경:16,790백만원)

당 초		변 경		사 유
구 분	계	구 분	계	실시 설계에 따른 사업비 변경
계	13,130	계	16,790
국 비	4,700	국 비	4,449
시 도 비	1,000	시 도 비	954
시군구비	7,430	시군구비	11,387

사업명

소요문화생태관광 개발사업

담당자

문화체육과 김성윤

(☎860-2093)

□ 사업목적 및 필요성

○ 웰빙, 문화, 놀이 등을 즐길 수 있는 관광자원 개발

○ 다양한 볼거리, 즐길거리를 제공함으로써 관광객의 욕구 만족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ∼ 2014. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 162-4번지 일원

○ 규 모 : 11,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000		5	1,995
국 비	1,000		4	996
시 도 비	300		1	299
시군구비	700			700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

○ 2014. 3. : 실시설계용역 완료

○ 2014. 6. : 공사 계약 및 착공

□ 향후계획

○ 2014. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

경기북부 어린이박물관 건립

담당자

문화체육과 김재헌

(☎860-2058)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부지역의 문화시설 인프라 구축 및 창의적인 어린이 프로그램을

통해 가족 간의 유대를 높이고 어린이의 지적·신체적 재능을 발달시키는

체험학습형 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 9. ∼ 2015. 12.

○ 위 치 : 상봉암동 162번지 일원

○ 규 모 : 부지 12,237㎡, 건축연면적 5,646.65㎡(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	19,200		836	9,358	9,006
시 도 비	9,600		418	4,679	4,503
시군구비	9,600		418	4,679	4,503

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2012. 9. 20.  : 박물관 유치 확정

○ 2013. 7. 31.  : 건축설계용역 및 전시물 제작·설치 설계 용역 착수

○ 2014. 3. 31.  : 건축설계용역 완료

○ 2014. 6. 30.  : 전시설계 완료

○ 2014. 7.      : 조달청 건축(건축·토목·기계) 공사업체 적격심사 중

□ 향후계획

○ 2014.  8. : 공사 착공

○ 2015. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동두천시 두드림 패션지원센터 건립

담당자

지역경제과 윤미옥

(☎031-860-2325)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역에 집적된 섬유염색 산업의 연계산업으로 섬유봉제 산업을 육성하여       효율적 부가가치를 창출, 지역경제 활성화 및 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009. 6월 ~ 2013. 12월

○ 위 치 : 경기도 동두천시 동두천로 97

○ 규 모 : 부지 3,933㎡/연면적 16,406㎡/지하3층 지상10층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,990백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	19,990	13,723	6,267
국 비	9,000	5,749	3,251
시 도 비	4,500	2,874	1,626
시군구비	6,490	5,100	1,390

□ 추진상황(완료 : 100%)

○ 2010. 9.13. : 타당성 조사 용역 완료

○ 2012.11. 6. : `13년 국․도비 내시(사업비 전액 확보)

○ 2013. 4.26. : 공장호실 대부 제한경쟁입찰 공고(제1차-56개실)

○ 2013.10.21. : 준공

○ 2013.11.26. : 준공식 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

신천 생태하천 복원사업

담당자

환경보호과 정소영

(☎031-860-2255)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신천의 생태하천복원을 통하여 동·식물의 서식처로서 생태적 기능을 확보하고, 아이         들이 멱감을 수 있는 하천으로 발전시켜 물 환경조성에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2005. 10. ~ 2014. 07.

○ 위    치 : 양주시 경계(은현면 용암리) ~ 동두천시 상패동

○ 사 업 량 : L=5.7km (호안정비 5.7km, 친수공간조성 3개소, 수생식물 식재 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,003백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	20,003	16,721	3,282
국 비	12,506	10,126	2,380
시 도 비	2,345	2,170	175
시군구비	5,152	4,425	727

□ 추진상황(완료 : 80%)

○ 2005. 03. : 대형공사 집행기본계획서 제출(건설기술심의요청)

○ 2005. 04. : 사전환경성 검토 협의 요청 및 결과 통보

○ 2005. 05. : 사전타당성조사

○ 2007. 02. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2007. 03. : 사전 환경성 검토

○ 2007. 04. : 실시설계심의에 따른 지방건설기술심의 요청 및 결과 통보

○ 2007. 08. : 조달청 원가조회 의뢰 및 결과 통보

○ 2008. 01. : 공사 착공

○ 2013. 03. : 6차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2014. 07. : 총공사 준공

사업명

신천보행전용교량 설치공사

담당자

도로과문기식(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보산동 관광특구와 상패동 캠프님블에 개교 예정인 침례신학 대학교를

연계시키는 보행전용교량 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008. 03 ~ 2013. 05

○ 위 치 : 보산동 관광특구 ~ 상패동 캠프님블 일원

○ 규 모 : 교량설치 L=0.15km, B=6m~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	8,400	1,600
국 비	5,000	4,489	511
시 도 비	113	113
시군구비	4,887	3,798	1,089

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2009. 10. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2011. 07. 공사착공

○ 2013. 05. 공사완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

캠프님블 도로개설공사

담당자

도로과문기식(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 침례신학대학교 개교로 인한 교통량 증가에 대비하여 기존 협소한 도로폭을

확장하여 원활한 교통 소통 및 경제활성화로 지역균형 발전에 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 03 ~ 2013. 08

○ 위 치 : 상패동 캠프님블 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.54km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,908백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,908	2,216	692
국 비	1,203	1,203
시군구비	1,705	1,013	692

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2011. 05. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2012. 03. 공사착공

○ 2013. 08. 공사완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

구분		당초	변경	증감	변경사유
총사업비		6,000	2,908	감 3,092	당초 3개 노선중 2개 노선 취소에 따른 감소
재원	국 비	3,000	1,203	감 1,797
	시 비	3,000	1,705	감 1,295

사업명

동두천중앙역 역세권 개발사업

담당자

도로과김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천 중앙역 주변 도로확장을 통한 역세권 개발도모 및 상대적으로 낙후된

원도심 상권 개발 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 03 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 동두천중앙역 ~ 어수로사거리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.592km, B=15m~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	34,700	10,241	5,549	4,910	14,000
국 비	17,350	6,991	4,549	2,455	3,355
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	16,350	2,250	1,000	2,455	10,645

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2011. 04. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2013. 03. 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

상패로~신사로간 연결도로개설공사

담당자

도로과문기식(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시와 양주지역을 동․서로 연결하는 지방도364호선의 연결확충으로         지방도로의 기능 확보와 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004. 06 ~ 2014. 12

○ 위 치 : 상패동 시민회관 뒤 ~ 생연2동 신사로 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.05km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	29,000	12,490	7,350	9,160
국 비	14,500	7,000	5,000	2,500
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	13,500	4,490	2,350	6,660

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2011. 07. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2011. 12. 공사착공

□ 향후계획

○ 2014. 12. 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

변전소~부처고개간 도로개설

담당자

도로과김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도3호선에서 시가지를 경유하지 않고 지방도 364호선(광암~마산)으로

연결되는 시가지 외부 연결도로망 확충을 통하여 원활한 지역간 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2004. 06 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 송내동(변전소)~광암동(부처고개) 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.66km, B=12~25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 59,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	59,300	17,200	8,000	8,500	25,600
국 비	29,650	8,600	5,000	7,500	8,550
시군구비	29,650	8,600	3,000	1,000	17,050

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 06. 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2013. 08. 공사착공

□ 향후계획

○ 2016. 12. 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요동 도시계획도로

(동막천 일원)개설

담당자

도로과김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 박찬호 야구공원 및 소요동 동막천 일원 환경 개선을 위한 기반시설 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2014

○ 위 치 : 소요동 동막천 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.4km, B=10m~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000		520	2,480
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		520	2,480

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2013. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2014. 01. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2014. 09. : 지장물 철거 완료

○ 2014. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요동 도시계획도로

(중로3-32호선) 개설

담당자

도로과김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요동에 위치한 산림욕장 이용 관광객 증가 및 박찬호 야구공원 개장에

따른 교통수요 충족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2015

○ 위 치 : 상봉암동 먹쟁이골 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.277km, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,600	20	1,000		1,580
시군구비	2,600	20	1,000		1,580

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2012. 08. : 실시설계용역 완료

○ 2013. 10. : 투융자 심사 완료

□ 향후계획

○ 2014. 12. : 지장물 및 토지보상 완료

○ 2015. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

안흥지구 주거환경개선사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안흥동 주변 노후된 주택이 밀집된 지역에 대하여 도로, 상·하수도 등

도시기반 시설 확충을 통해 쾌적한 주거환경을 조성하여 지역주민의

불편을 해소코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007 ~ 2015

○ 위 치 : 안흥동 38번지 일원

○ 규 모 :  75,245㎡ (도로개설 L=708m, B=6~10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,582백만원                                      (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,582	2,630	226	881	845
국 비	2,877	1,315	181	705	676
도 비	671	657	14
시 비	1,034	658	31	176	169

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 2007. 3 : 실시설계용역 착수

○ 2013. 6 : 실시설계용역 준공

○ 2013. 8 : 감정평가 및 보상협의

○ 2014. 7 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2015. 7 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

생연1-1지구 주거환경개선사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 주변 노후된 주택이 밀집된 지역에 대하여 도로, 상·하수도 등

도시기반 시설 확충을 통해 쾌적한 주거환경을 조성하여 지역주민의

불편을 해소코자함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2015년

○ 위 치 : 생연동 512-3번지 일원

○ 규 모 : 46,425㎡ (도로개설 L=525m, B=4~6m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,477백만원                                     (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,477	1,848	209	625	795
국 비	2,227	924	167	500	636
도 비	474	462	12
시 비	776	462	30	125	159

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2008. 9 : 실시설계용역 착수

○ 2013. 6 : 실시설계용역 준공

○ 2013. 5 : 감정평가

○ 2013. 8 : 보상협의

□ 향후계획

○ 2015. 3 : 공사 착공

○ 2015.12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재
사업규모	56,108㎡	46,425㎡
총사업비	2,700백만원	3,477백만원
사업기간	2007년~2010년	2007년~2015년

사업명

소요초등학교 후문앞 도로개설

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요동 소요초등학교 후문 앞  도시기반시설 확충을 통해 쾌적한 주거환경을

조성하여 주민들의 교통불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 상봉암동 267-1번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=513m, B=8~15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,800		60		2,740
시 비	2,800		60		2,740

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 1 : 실시설계용역 착수

○ 2013.11 : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2015. 01 : 보상 착수

○ 2015. 12 : 보상 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

중앙로~동광로간 도로개설사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동광로~보산역 철로변간 도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를 개설하여 쾌적한 주거환경 조성 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010 ~ 2015

○ 위 치 : 생연동 568-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=447m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,050백만원                                     (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,050	550	1,000	1,500
시 비	3,050	550	1,000	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2011. 05 : 설계용역 완료

○ 2012. 04 : 보상협의

○ 2014. 05 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2015. 05 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2010~2012	2010~2015

사업명

소요산 산림욕장 진입도로 개설사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산 산림욕장 진입도로를 개설하여 산림욕장의 접근성 개선 및 도로망 구축으로 소요산권 관광자원 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2014

○ 위 치 : 상봉암동 산21-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=953m, B=6~11m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원                                     (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000		2,200	3,800
도 비	2,300		100	2,200
시 비	3,700		2,100	1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2011. 05 : 설계용역 완료

○ 2012. 04 : 보상협의 착수

○ 2013. 07 : 보상협의

○ 2013. 08 : 총사업비 변경에 따른 투․융자 심사

○ 2014. 03 : 공사 재착공

□ 향후계획

○ 2014. 12 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업규모	L=800m, B=10m	L=953m, B=6~11m
총사업비	3,100백만원	6,000백만원
사업기간	2012~2013	2012~2014

사업명

동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상패동 동두천경찰서 신축부지 진입도로와 상패로 및 동광교와 연결되는 도시계획도로를 개설하여 원활한 차량 소통 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015

○ 위 치 : 상패동 48-8번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=155m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원                                     (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,100		40		2,060
시 비	2,100		40		2,060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 01 : 설계용역 착수

○ 2013. 05 : 설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2015. 01 : 보상 착수

○ 2015. 12 : 보상 완료

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2013~2014	2013~2015

사업명

(구)재이손산업~삼익빌라간 도로개설사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평화로~(구)재이손간 도로개설 구간과 연결되는 도시계획도로를 개설하여

삼익빌라 주변 마을 주민들의 원활한 차량 소통 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015

○ 위 치 : 하봉암동 31-2번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=325m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원                                    (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000		50		1,950
시 비	2,000		50		1,950

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2013. 03 : 설계용역 착수

○ 2013. 07 : 도시관리계획 변경 결정 용역 착수

□ 향후계획

○ 2014. 10 : 도시관리계획 변경 결정 용역 준공

○ 2015. 01 : 보상 착수

○ 2015. 12 : 보상 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동두천중앙역세권 도로개설사업

담당자

도시과 김재상(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 역세권 주변에 도시계획도로를 개설하여 원활한 차량 소통 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2014

○ 위 치 : 생연동 780-10번지 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1,200m, B=6~10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,400백만원                                    (단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,400	2,000	1,600	1,800
국 비	2,700	1,000	800	900
시 비	2,700	1,000	800	900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2012. 01 : 실시설계용역 착수(소로 3-161호선외 1개노선)

○ 2012. 08 : 실시설계용역 준공(소로 3-161호선외 1개노선)

○ 2013. 02 : 공사 착공 (소로 3-161호선외 1개노선)

○ 2013. 02 : 실시설계용역 착수 (소로 3-49호선외 1개노선)

○ 2013. 06 : 보상협의 (소로 3-49호선외 1개노선)

○ 2013. 07 : 실시설계용역 착수(소로 3-156호선)

○ 2013. 11 : 공사준공(소로 3-161호선외 1개노선)

○ 2014. 02 : 공사착공(소로 3-49호선외 1개노선)

□ 향후계획

○ 2014. 12 : 공사준공(소로 3-49호선외 1개노선)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2012~2013	2012~2014
사업비	7,000백만원	5,400백만원

사업명

복합화력발전소 용수공급시설 설치

담당자

도시과 강문성(☎860-2445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복합화력발전소 공급에 필요한 용수의 안정적 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 4 ∼ 2014. 9

○ 위 치 : 양주시 경계 ∼ 동두천복합화력발전소 진입부

○ 규 모 : 송수관로(D600) L=7km, 가압장(Q=32,500㎥/d)

진입도로 B=8m, L=0.4km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,100		8,048	8,052
시군구비	16,100		8,048	8,052

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2013.03.21. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2014.09.17. : 공사완료 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

신천개수사업

담당자

안전총괄과 장세광(☎860-2335)

□ 사업목적 및 필요성

○ 캠프님블 반환기지사업과 연계하고 신천수계 하천기본계획 수립에 따라       신천 하천정비(캠프님블 구간)사업을 실시하여 치수공간을 확보하고        홍수위 저감효과를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 05 29. ~ 2013. 05. 12.

○ 위 치 : 경기 동두천시 상패동 19번지 일원

○ 규 모 : 하천개수 L=560m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,625	3,121	504
시 도 비	3,625	3,121	504

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 05. 29. : 공사착공

○ 2013. 05. 12. : 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

동두천시 하수처리장 총인처리시설

담당자

환경사업소 석태화

(☎860-3210)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공하수처리장 방류 수질 총인(T-P) 항목의 수질 기준이 강화됨에 따라

총인처리시설 설치공사 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 05. 23. ∼ 2013. 07. 06.

○ 위 치 : 동두천시 환경사업소 내 일원

○ 규 모 : 총인처리시설 Q=86,000톤/일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,660백만원 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,660	4,130	2,530
국 비	3,330	2,065	1,265
시 도 비	1,665	1,033	633
시군구비	1,665	1,032	632

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ 2012.05.23. : 공사착공

○ 2013.07.06. : 공사완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음