11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
청소년수련관 건립	7,200	310	1,717	5,173	2016	2011	3
장사시설 신축 (공설묘지 재개발)	16,790	1,179	13	15,598	2017	2007	10
소요문화생태관광 개발사업	2,000		5	1,995	2014	2011	12
경기북부 어린이박물관 건립	19,200		836	18,364	2015	2012	10
동두천시 두드림 패션지원센터 건립	19,990	13,723	6,267		2013	2010	100
신천 생태하천복원사업	20,003	16,721	3,282		2014	2005	80
신천보행전용 교량설치공사	10,000	8,400	1,600		2013	2009	100
캠프님블 도로개설공사	2,908	2,216	692		2013	2009	100
동두천중앙역 역세권 개발사업	34,700	10,241	5,549	18,910	2016	2010	10
상패로~신사로간 연결도로개설공사	29,000	12,490	7,350	9,160	2014	2010	85
변전소~부처고개 도로개설	59,300	17,200	8,000	34,100	2016	2011	5

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
소요동 도시계획도로 (동막천 일원)개설	3,000		520	2,480	2014	2013	20
소요동 도시계획도로 (중로3-32호선)개설	2,600	20	1,000	1,580	2015	2013	30
안흥지구주거환경 개선사업	4,582	2,630	226	1,726	2015	2006	40
생연1-1지구 주거환경개선사업	3,477	1,848	209	1,420	2015	2006	30
소요초등학교후문앞 도로개설	2,800		60	2,740	2015	2012	5
중앙로~동광로간 도로개설사업	3,050	550	1,000	1,500	2015	2010	40
소요산 산림욕장 진입도로 개설사업	6,000		2,200	3,800	2014	2012	50
동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업	2,100		40	2,060	2015	2012	5
(구)재이손산업~ 삼익빌라간 도로개설사업	2,000		50	1,950	2015	2012	5
동두천중앙 역세권 도로개설사업	5,400	2,000	1,600	1,800	2014	2011	70
복합화력발전소 용수공급시설 설치	16,100		8,048	8,052	2014	2013	90
신천개수사업	3,625	3,121	504		2013	2010	100
동두천시 하수처리장 총인처리시설	6,660	4,130	2,530		2013	2010	100