9-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요 사업비	2016년 이후 사업비	사업 완료 예정 연도	투자 심사 연도	현재까지진척률(%)
두드림디자인아트 빌리지조성사업	6,000	-	-	6,000	2017	2015	20
소요산권관광벨트화 연계구축사업	16,390	-	389	16,001	2019	2013	20
6산절경을 활용한 숲길조성사업	3,300	-	-	3,300	2018	2015	10
산림휴양형 MTB체험단지 조성	18,610	-	1,800	16,810	2019	2015	10
소요동 도시계획도로 (동막천일원) 도로개설공사	2,189	1,900	289	-	2015	2013	100
평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업	8,500	683	3,530	4,278	2017	2013	30
강변서로 (신천교~상패교) 개설사업	7,040	4,530	1,510	957	2017	2013	15
안흥지구 주거환경개선사업 (도로개설)	4,582	3,737	845	-	2015	2006	100

사업명	총사 업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요 사업비	2016년 이후 사업비	사업 완료 예정 연도	투자 심사 연도	현재까지진척률(%)
생연1-1지구 주거환경개선사업 (도로개설)	4,027	2,682	1,345	-	2016	2006	75
중앙로∼동광로간 도로개설사업	3,055	3,055	-	-	2017	2010	95
동두천중앙역 주변 도로개설사업	5,692	5,320	372	-	2015	2011	100
소요산 산림욕장 진입도로 개설사업	5,503	5,503	-	-	2015	2013	100
소요초등학교 후문 앞 도로개설사업	2,160	60	1,000	1,100	2017	2012	40
광암동 다목적회관 주변 도로개설사업	3,200	625	500	2,075	2017	2017	30
상패동 대원사옆 도로개설사업	2,501	50	1,001	1,450	2018	2013	30
푸른숲 드라마세트장 진입도로 기반조성	1,350	-	150	1,200	2016	2014	70%

‣(대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

두드림 디자인아트빌리지 조성사업

담당자

지역경제과 이후성(☎860-2276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미군감소로 붕괴직전의 보산동 관광특구 생존권 절박

○ 지난 10년간 지역 청년인구 22% 감소, 고용환경 미흡

○ 인접한 미군공여지의 투자유치를 위한 랜드마크 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 보산동 관광특구 강변로 일원

○ 규 모 : 공방 30개, 공방거리조성 150m, 지원센터 건립(3층, 연면적 1,000m2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	6,000			4,800	1,200
국 비				-	-
시 도 비	1,000			800	200
시군구비	5,000			4,000	1,000
지 방 채				-	-
민간자본				-	-
기 타				-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015.  6. : 경기 북동부 경제특화발전 공모사업 시상(50억원)

○ 2015. 12. : 간담회·견학·자문, 중기·투자심사 등 행정절차 완료

○ 2016.  6. : 인재영입, 지원센터 개소, 입주자 모집(9명 선정)

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 입주자 추가모집, 홍보플랫폼 마련, 문화콘텐츠 발굴, 공방거리 조성, 마케팅/브랜딩 착수, 관광·체험·판촉, 상인/주민 워크숍, 사업성과보고, 2단계 사업구상

사업명

소요산권 관광벨트화연계구축사업

담당자

공원녹지과 정원호(☎860-2415)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존의 산림욕장에 다양한 기능을 부여한 공원으로 조성하여 이용률 증대를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)

○ 위 치 : 상봉암동 산 21번지 외 33필지

○ 규 모 : 273,707㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	16,390	-	389	4,250	11,751
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	12,293	-	292	3,187	8,814
시군구비	4,097	-	97	1,063	2,937
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 10. : 조성계획 및 실시설계용역 착수

○ 2016. 1. : 문화재지표조사 완료

○ 2016. 5. : 주민설명회 및 의원간담회 완료

□ 향후계획

○ 2016. 11. : 경기도 건설기술심사 실시

○ 2016. 12. : 조성계획 및 실시설계완료

○ 2017. 3.~2019. 12. : 공사착공 및 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

6산절경을 활용한 숲길조성사업

담당자

공원녹지과 조은미(☎860-2471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천시의 6산을 하나의 스토리텔링으로 연계하여 수도권 제일의 등산코스로 개발하여, 산악관광도시로의 이미지를 구축하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018(3개년)

○ 위 치 : 동두천시 6산(소요·마차·칠봉·해룡·왕방산, 국사봉)

○ 규 모 : 50㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	3,300			1,000	2,300
국 비	2,640			800	1,840
시 도 비
시군구비	660			200	460
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2016. 2. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2016. 4. : 현장 조사 및 1차 중간보고 완료

○ 2016. 5. : 2차 중간보고 및 의원간담회 완료

□ 향후계획

○ 2016. 8. : 경기도 계약심사 실시 및 설계용역 완료

○ 2016. 9. : 공사발주 및 업체선정

○ 2016. 10.~2018. 12. : 공사착공 및 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

산림휴양형 MTB체험단지 조성

담당자

공원녹지과 박관섭(☎860-2413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕방산 국제MTB대회와 연계한 산림휴양형 MTB체험단지를 조성하여 4계절 숙박·휴양·체험이 가능한 기반시설을 마련함으로써, 산악레포츠 관광·휴양 도시로의 변화를 통하여 지역경제 활성화 및 양질의 새로운 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년∼ 2019년(5년)

○ 위 치 : 탑동동 산18번지 일원

○ 규 모 : 약70ha(696,739㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,610백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	18,610	-	1,800	3,881	12,929
국 비
시 도 비	13,958	-	1,350	2,911	9,697
시군구비	4,652	-	450	970	3,232
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계용역 및 소규모환경영향평가 추진 중

○ 대상지 토지매입 추진 중

□ 향후계획

○ 2016. 12. : 기본 및 실시설계 준공

○ 2017.  3. : MTB체험단지 공사 착수

○ 2017.  3.∼2019. 9. : 토목·기반시설·건축·조경공사 등 추진

○ 2019. 10. : MTB체험단지 준공 및 개장

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

소요동

도시계획도로(동막천일원)

도로개설공사

담당자

도로과 김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요15통 동막천 일원의 주민들에게 도로개설에 따른 기반시설 및 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 4. ~ 2015. 5.

○ 위 치 : 소요15통 동막천 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.235km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,189백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	2,189	1900	289
국 비
시 도 비
시군구비	1,800	1800
지 방 채
민간자본	389	100	289
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 1. : 공사착공

○ 2015. 5. : 공사완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

사업규모		총사업비(백만원)		사업기간
당초	변경	당초	변경	당초	변경
L=0.399km, B=10~15m	L=0.235km, B=15m	3,000	2,189	2013.4 ~ 2015.1	2013.4 ~ 2015.5

사업명

평화로(창말고개)위험도로 구조개선 사업

담당자

도로과 김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시야확보의 어려움과 노면불량으로 사고위험이 다분한 창말고개를 정비, 사고발생 예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 소요동 동양대학교 주변

○ 규 모 : 도로개설 L=0.58km, B=20~35m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	8,500	682.5	3,529.5	1,700	2,588
국 비	3,000	175	577	450	1,798
시 도 비
시군구비	5,500	507.5	2,952.5	1,250	790
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2015. 11. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

사업규모		총사업비(백만원)		사업기간
당초	변경	당초	변경	당초	변경
L=0.40km, B=20~30m	L=0.58km, B=20~35m	8,000	8,500	2014.3 ~ 2016.12	2014.3 ~ 2017.12

사업명

강변서로(신천교~상패교) 개설사업

담당자

도로과 김수근(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통량이 증가하는 국도3호선의 교통량 분산을 통한 교통체계 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 상패동 신천교 ~ 상패동 동광교 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.924km, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,040백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	7,040	4,573	1,510	957
국 비	3,520	3,520	-
시 도 비
시군구비	3,520	1,053	1,510	957
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 2014.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2015.  6. : 토지 및 지장물 보상 실시

○ 2015. 12. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

안흥지구 주거환경개선사업 (도로개설)

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안흥동 일원의 노후 주택 밀집 지역에 도로, 상·하수도 등 기반 시설을 확충하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2007. ∼ 2015.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 안흥로11번길 58 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=708m, B=6∼10m (소로 1-17호선 외 3개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,582백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	4,582	3,737	845
국 비	2,877	2,201	676
시 도 비	671	671
시군구비	1,034	865	169
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2007.  3. : 실시설계용역 착수

○ 2013.  6. : 실시설계용역 준공

○ 2013.  8. : 보상 착수

○ 2014.  7. : 공사 착공

○ 2015. 11. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

생연1-1지구 주거환경개선사업 (도로개설)

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생연동 일원의 노후 주택 밀집 지역에 도로, 상·하수도 등 기반 시설을 확충하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008. ∼ 2016.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 평화로2508번길 일원(평화로 ∼ 보영여고 사이)

○ 규 모 : 도로개설 L=525m, B=4∼6m (소로 3-31호선 외 5개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,027백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	4,027	2,682	1,345
국 비	2,667	1,591	1,076
시 도 비	475	475
시군구비	885	616	269
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2008. 9. : 실시설계용역 착수

○ 2013. 6. : 실시설계용역 준공

○ 2013. 8. : 보상 착수

○ 2015. 4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 10. : 공사 준공 예정.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

중앙로 ∼ 동광로 간 도로개설사업

담당자

도시과 황원준(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙로 ∼ 동광로 간 도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를 개설하여 쾌적한 주거환경 조성 및 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. ∼ 2017.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 중앙로 362 ∼ 동광로 75-1 일원 (보산역 전철하부)

○ 규 모 : 도로개설 L=447m, B=8m (소로 2-313호선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,055백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	3,055	3,055
국 비
시 도 비
시군구비	3,055	3,055
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2010. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2011.  5. : 실시설계용역 준공

○ 2012.  4. : 보상 착수

○ 2014.  5. : 공사 착공 (1차)

○ 2015.  7. : 공사 준공 (1차)

□ 향후계획

○ 2017. 3. : 공사 착공 예정 (2차 – 잔여 구간)

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
총사업비	3,300	3,055
사업기간	2010 ∼ 2012	2010 ∼ 2017

사업명

동두천중앙역 주변 도로개설사업

담당자

도시과 황원준(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역 역세권 주변 도시기반시설 미비지역에 도시계획도로를 개설하여 원활한 차량 소통 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ∼ 2015.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 평화로 2413-10 일원 (동두천중앙역 주변)

○ 규 모 : 도로개설 L=822m, B=6∼10m (소로 1-85호선 외 4개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,692백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	5,692	5,320	372
국 비	2,900	2,900
시 도 비	100	100
시군구비	2,692	2,320	372
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012.  1.∼2013. 11. : 공사 준공 (소로 1-85호선 : 영남철강∼이나이트)

○ 2012.  1.∼2013.  9. : 공사 준공 (소로 3-161호선 : 중화원∼중부가스)

○ 2014.  5.∼2014.  6. : 공사 준공 (소로 2-320호선 : 동두천로∼중앙로)

○ 2013.  9.∼2014. 12. : 공사 준공 (소로 3-156호선 : 생연동 광명빌라)

○ 2012. 12.∼2015.  5. : 공사 준공 (소로 3-49호선 : 동두천중앙역 앞)

□ 향후계획

○ 해당없음.

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
총사업비	7,000	5,692
사업기간	2012 ∼ 2013	2012 ∼ 2015

사업명

소요산 산림욕장 진입도로 개설사업

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요산 및 산림욕장을 찾는 관광객들에게 편리한 도로망을 제공하여 소요산 주변 관광자원 활성화를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ∼ 2015.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 12-13 일원 (소요산 산림욕장 일원)

○ 규 모 : 도로개설 L=953m, B=6∼11m (소로 1-97호선 외 1개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,503백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	5,503	5,503
국 비
시 도 비	2,300	2,300
시군구비	3,203	3,203
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.  3. : 실시설계용역 준공

○ 2013.  6. : 보상 착수

○ 2013. 12. : 공사 착공

○ 2015.  6. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 해당없음.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

소요초등학교 후문 앞 도로개설사업

담당자

도시과 황원준(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요초등학교 후문 주변 도로개설을 통하여 주민 및 학생들에게 안전하고 편리한 도로망을 제공하여 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ∼ 2017.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 봉동로40번길 33-20 ∼ 봉동로 96 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=514m, B=6∼15m (중로 2-43호선 외 1개 노선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	2,160	60	1,000	1,100	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,160	60	1,000	1,100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 1. : 실시설계용역 착수

○ 2015. 3. : 실시설계용역 준공

○ 2015. 7. : 보상 착수

○ 2016. 5. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2017. 5. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경
사업규모	L=513m, B=8∼15m	L=514m, B=6∼15m
총사업비	2,800	2,160
사업기간	2013 ∼ 2015	2013 ∼ 2017

사업명

광암동 다목적회관 주변 도로개설사업

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 광암동 지역에 도로개설을 통하여 원활한 차량 소통 및 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ∼ 2017.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 삼육사로 1285 ∼ 쇠목길4번길 45 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=380m, B=10m (소로 1-33호선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	3,200	625	500	-	2,075
국 비	3,130	555	500	-	2,075
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	70	70	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013. 12. : 실시설계용역 착수

○ 2014.  4. : 실시설계용역 준공

○ 2015.  2. : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2017. 3. : 공사 착공 예정 (예산 확보 시)

○ 2017. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

상패동 대원사옆 도로개설사업

담당자

도시과 강문성(☎860-2374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상대적으로 낙후된 상패동 지역에 도로개설을 통하여 원활한 차량 소통 및 주민들에게 쾌적한 주거환경을 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. ∼ 2018.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 신천로 5-16 ∼ 신천로 33 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=320m, B=8m (소로 2-107호선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,501백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	2,501	50	1,001	525	925
국 비	1,160	-	-	360	800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,341	50	1,001	165	125
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2012. 9. : 실시설계용역 착수

○ 2013. 2. : 실시설계용역 준공

○ 2015. 6. : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2017. 3. : 공사 착공 예정

○ 2018. 12. : 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음.

사업명

푸른숲 관광테마세트장 진입도로 기반조성

담당자

공여지개발과 최제호(☎860-2727)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 탑동동 일원의 산림자원을 활용한 관광자원개발 및 지역 균형발전을 위하여 기반시설을 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.~2016.

○ 위 치 : 탑동동 888-3번지 일원

○ 규 모 : 교량설치 L=40m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15년	‘16년	‘17년 이후
계	1,350		150	1,200
국 비	600			600
시 도 비
시군구비	750		150	600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2014. 1. : 도시계획시설 결정

○ 2015. 6. : 보상협의

○ 2016. 2. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016. 9. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2014~2015	2014~2016
총사업비	2,150백만원	1,350백만원